Муниципальное  образование  «Смидовичский   муниципальный  район»
Еврейской     автономной   области

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________                                                                                                     № ____

пос. Смидович

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 25.08.2017 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сельских поселениях муниципального образования  «Смидовичский муниципальный район» на 2017-2019 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»  администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление администрации муниципального района от 25.08.2017 №461 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сельских поселениях муниципального образования  «Смидовичский муниципальный район» на 2017-2019 годы» следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «ПАСПОРТ муниципальной программы Смидовичского муниципального района»:
- строку «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района и прогнозная оценка расходов областного бюджета на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам», изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района и прогнозная оценка расходов областного бюджета на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам	Реализация программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального района. 
Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования  составит 11012,138 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 4309,532 тысяч рублей, из них: 4309,532 тыс. рублей – в  2019 году; 
за счет средств областного бюджета – 5696,06 тысяч рублей, из них: 2006,06 тыс. рублей – в 2018 году, 3690,00 тыс. рублей – в 2019 году; 
за счет средств местного бюджета  – 1006,546 тыс. рублей, из них: 657,94 тыс.рублей в 2018 году, 348,606 тыс.рублей - в 2019 году»	

1.2.  Раздел 7 «Наименование и краткое описание мероприятий программы» изложить в следующей редакции:
 «7. Наименование и краткое описание мероприятий программы

Достижение цели и решение задач программы осуществляется на основе выполнения мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, снижению уровня износа коммунальных инфраструктур, обеспечению населения в сельских поселениях качественными жилищно-коммунальными услугами.
В 2017-2018 годах выполняются мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения котельной «Октябрьская» с. Волочаевка-1 с заменой котлов.
В 2018-2019 годах выполняются мероприятия по реконструкции системы водоснабжения в с. Партизанское.
В 2019 году выполняются мероприятия:
- по подготовке документации для заключения концессионных соглашений;
- по монтажу водовода от основной магистрали до с. Волочаевка-1;
- по модернизации котельных «Центральная» с. Партизанское, «Центральная» с. Камышовка.
Перечень основных  мероприятий  программы
Таблица 1
№ п/п	Наименование мероприятий программы	Срок реализации	Ожидаемый результат в количественном измерении	Последствия нереализации программы	
1	2	3	4	5	
1	Реконструкция  котельной с. Волочаевка-1	2017-2018	Монтаж двух котлов общей мощностью 2,3 Гкал/час	Уменьшение котельного оборудования, снижение  уровня удовлетворенности населения качеством услуг по теплоснабжению	
2	Реконструкция системы водоснабжения в с. Партизанское	2018-2019	Прокладка трубопровода водоснабжения протяженностью 2,5 км.	Увеличение процента износа сетей водоснабжения, ухудшение качества предоставленных коммунальных услуг	
3	Подготовка документации для заключения концессионных соглашений (разработка схем, проектно-сметной документации по объектам коммунальной инфраструктуры)	2019	Разработка двух схем, оценка имущества, техническое задание	Невозможность реализации Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»	
4	Монтаж водовода от основной магистрали до с. Волочаевка-1	2019	Прокладка трубопровода водоснабжения протяженностью 0,22 км	Увеличение процента износа сетей водоснабжения, ухудшение качества предоставленных коммунальных услуг	
5	Модернизация котельной «Центральная» с. Партизанское	    2019	Монтаж двух котлов, общей мощностью 2,5 Гкал/час	Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению	
6	Модернизация котельной «Центральная» с. Камышовка	    2019	Монтаж двух котлов, общей мощностью 2,5 Гкал/час	Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению»	

1.3. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение реализации программы» изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение реализации программы

Реализация программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального района. 
Финансовое обеспечение по источникам финансирования по годам реализации составит  11012,138 тыс. рублей, в том числе: 
в 2018 году – 2664,00 тыс. рублей, из них:
-  средства областного бюджета – 2006,06 тыс. рублей; 
-  средства бюджета муниципального района   – 657,94 тыс. рублей;
в 2019 году – 8348,138 тыс. рублей, из них:
-средства федерального бюджета- 4309,532 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 3690,00 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального района – 348,606 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении  муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средствах областного бюджета, структура финансирования программы по направлениям расходов, представлена в приложениях № 3,  4 к программе.»
   1.4. Приложения № 2, 3, 4  к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №  1, 2, 3.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Смидовичского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Районный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации
муниципального района                                                     	 
М.В. Шупиков